Formblatt 214.H Teil 3 - Ausführungsfristen
KaE-GAP-BA1 VE102 Baumeister

1. Ausführungs-Haupttermine

Leistungsbeginn gemäß Formblatt 214.H: 
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 
18.03.2024 
zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
Leistungsende Rohbau bis 20.02.2025 (ohne Restarbeiten)
Leistungsende komplett bis 21.05.2027 (mit Restarbeiten)

2. Zwischentermine

Unmittelbar nach Vergabe: Startgespräch, Erstellung des Detail-Bauzeitenplanes durch den Auftragnehmer, Plan- und Unterlagenanforderungen bei den Projektbeteiligten, Beginn der Aufmaße sowie der Werkstattplanungen, Übernahmen der Baugruben und Wasserhaltungen.

Unterkonstruktion und Technikzuleitungen für BE-Container des AG fertig bis 03.05.2024
Umfahrungsstrasse (Baumeister-GALA-Bau): 23.04.2023 – 15.05.2023
Baugrube Pflegekubus Feinplanie fertig bis 31.05.2024
Baugrube Funktionsbau Feinplanie fertig bis 07.06.2024
BoPla Pflegekubus fertig bis 09.08.2024
BoPla Funktionsbau incl. Aufzugunterfahrt und Pumpensumpf fertig bis: 19.07.2024
Übergabe Baugrube und Wasserhaltung von VE101 an VE102: 02.04.2023
Wasserhaltung bis: 12.07.2023
Dachdecke mit Attiken Pflegekubus fertig bis 06.03.2025
Dachdecke mit Attiken und Aufkantungen Funktionsbau fertig bis 20.02.2025

---