Gemeinde Harbke 
Halberstädter Straße 16
39365 Harbke

04_HOAI Leistungsbilder Angebotsabfrage

Datum:	03.03.2026	
Leistungszeitraum:	03.03.2026	
Projektname:	VG-260302 Schlosspark Harbke	
Bezug:		
Vorhaben:	Touristische Aufwertung und Erschließung des Schlosses und Schlossparkareals Harbke	

Leistungsbilder in Anlehnung der HOAI (2021)

Leistungsbild: § 43 HOAI: Ingenieurbauwerke (BA 1 Brücken und Toranlagen)
Sanierung und Instandsetzung der bestehenden Brückenbauwerke sowie der historischen Toranlagen einschließlich aller konstruktiven, statischen und denkmalpflegerischen Maßnahmen

Kostenermittlung nach DIN276	
	
  Kostenermittlung nach DIN 276 Ausgabe August 2009 für Kostenschätzung:	
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	100% von 546.000,00 €	546.000,00 €	
Summe	Bauwerk - Baukonstruktionen		546.000,00 €	

400	Bauwerk - Technische Anlagen	100% von 36.000,00 €	36.000,00 €	
Summe	Bauwerk - Technische Anlagen		36.000,00 €	

Summe	Kostenschätzung		582.000,00 €	

				

Interpolation:				

Anrechenbare Kosten gemäß Kostenschätzung: 	
582.000,00 €	
Honorarzone (HZ): III	
Honorarsatz (HS): Basishonorarsatz (0%)	
	
Interpolation gemäß Honorartafel § 44:	
	
anrechenbare Kosten (AK)		582.000,00 €	
	
unterer Wert lt. Honorartafel (UW)		500.000,00 €	
  Von-Wert für unteren Wert (HUWmin)		48.195,00 €	
  Bis-Wert für unteren Wert (HUWmax)		54.861,00 €	
	
oberer Wert lt. Honorartafel (OW)		750.000,00 €	
  Von-Wert für oberen Wert (HOWmin)		65.767,00 €	
  Bis-Wert für oberen Wert (HOWmax)		74.863,00 €	
	
Honorar für unteren Wert (HUW) = HUWmin + (HUWmax - HUWmin) * HS	
  48.195,00 + (54.861,00 - 48.195,00) * 0 % =		48.195,00 €	
Honorar für oberen Wert (HOW) = HOWmin + (HOWmax - HOWmin) * HS	
  65.767,00 + (74.863,00 - 65.767,00) * 0 % =		65.767,00 €	
	
Grundhonorar (100%) (GH) = HUW + (HOW-HUW) * [(AK-UW) : (OW-UW)]	
  48.195,00 + (65.767,00 - 48.195,00) * [	
      (582.000,00 - 500.000,00) : (750.000,00 - 500.000,00)]	
		= 53.958,62 €	

Angebotsgrundlage:	
Leistungsphasen	HOAI (2021)	Angebot %	Angebot €	
1 Grundlagenermittlung	2%			
	a) Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers			
	b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf			
	c) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter			
	d) bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klären der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung			
	e) Ortsbesichtigung			
	f) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
2 Vorplanung	10%			
	a) Analysieren der Grundlagen			
	b) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter			
	c) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit			
	d) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten			
	e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der alternativen Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter			
	f) Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen			
	g) Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung			
	h) Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu 2 Terminen,			
	i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen			
	j) Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen			
	k) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
3 Entwurfsplanung	25%			
	a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen			
	b) Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter			
	c) fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern			
	d) Ermitteln und Begründen der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung			
	e) Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu 3 Terminen, überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen			
	f) Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten			
	g) Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung			
	h) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit			
	i) Bauzeiten- und Kostenplan			
	j) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
4 Genehmigungsplanung	5%			
	a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter			
	b) Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter			
	c) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter			
	d) Abstimmen mit Behörden			
	e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu 4 Erläuterungs-, Erlärterungsterminen  			
	f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu 10 Kategorien			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
5 Ausführungsplanung	15%			
	a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung			
	b) Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben			
	c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung			
	d) Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
6 Vorbereitung der Vergabe	13%			
	a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter			
	b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen			
	c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten			
	d) Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen			
	e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse			
	f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung			
	g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
7 Mitwirkung bei der Vergabe	4%			
	a) Einholen von Angeboten			
	b) Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen des Preisspiegels			
	c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken			
	d) Führen von Bietergesprächen			
	e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens			
	f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen			
	g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung			
	h) Mitwirken bei der Auftragserteilung			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
8 Bauoberleitung	15%			
	a) Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe			
	b) Aufstellen, Fortschreiben und überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm)			
	c) Veranlassen und Mitwirken beim Inverzugsetzen der ausführenden Unternehmen			
	d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme			
	e) Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mängeln, Fertigung einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme			
	f) überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage			
	g) Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran			
	h) übergabe des Objekts			
	i) Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche			
	j) Zusammenstellen und übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			

Summe				
			
Grundleistungen:			
			
Honorarzone  gemäß § 44 HOAI: III
Honorarsatz: Basishonorarsatz (0%)			
Anrechenbare Kosten gemäß Kostenschätzung		582.000,00 €	
Grundhonorar für 100 %:		53.958,62 €	
    1 Grundlagenermittlung	 %	 €	
    2 Vorplanung	 %	 €	
    3 Entwurfsplanung	 %	 €	
    4 Genehmigungsplanung	 %	 €	
    5 Ausführungsplanung	 %	 €	
    6 Vorbereitung der Vergabe	 %	 €	
    7 Mitwirkung bei der Vergabe	 %	 €	
    8 Bauoberleitung	 %	 €	
Summe der Grundleistungen:		 €	

Zeithonorar:			
	Stundenlohn Ingenieur	10,00 h	 €	
	Stundenlohn Technischer Mitarbeiter	10,00 h	 €	
Summe		 €	

Umbauzuschlag:	
% von  €	
€	

Nebenkosten:			
	Baustellenüberwachung
2x Wöchentlich Baustellenüberwachung in Präsenz vor Ort		€	
	Sonstiges	% von       €	€	
Summe der Nebenkosten:		 €	

Summe Leistungsbild 
§ 43 HOAI: Ingenieurbauwerke (BA 1 Brücken und Toranlagen)			
€	

Leistungsbild: § 51 HOAI: Tragwerksplanung (BA1 Brücken Und Toranlagen)
Sanierung und Instandsetzung der bestehenden Brückenbauwerke sowie der historischen Toranlagen einschließlich aller konstruktiven, statischen und denkmalpflegerischen Maßnahmen

Nach § 50(3) HOAI2021 sind 90% der Baukonstruktionskosten und 15% der Kosten der Technischen Anlagen anrechenbar

Kostenermittlung nach DIN276	
	
  Kostenermittlung nach DIN 276 Ausgabe Dezember 2008 für Kostenschätzung :	
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	100% von 523.000,00 €	523.000,00 €	
Summe	Bauwerk - Baukonstruktionen		523.000,00 €	

Summe	Kostenschätzung		523.000,00 €	

				

Interpolation:				

Anrechenbare Kosten gemäß Kostenschätzung: 	
523.000,00 €	
Honorarzone (HZ): III	
Honorarsatz  (HS): Basishonorarsatz (0%)	
	
Interpolation gemäß Honorartafel § 52:	
	
anrechenbare Kosten (AK)		523.000,00 €	
	
unterer Wert lt. Honorartafel (UW)		500.000,00 €	
  Von-Wert für unteren Wert (HUWmin)		44.633,00 €	
  Bis-Wert für unteren Wert (HUWmax)		55.666,00 €	
	
oberer Wert lt. Honorartafel (OW)		750.000,00 €	
  Von-Wert für oberen Wert (HOWmin)		61.401,00 €	
  Bis-Wert für oberen Wert (HOWmax)		76.578,00 €	
	
Honorar für unteren Wert (HUW) = HUWmin + (HUWmax - HUWmin) * HS	
  44.633,00 + (55.666,00 - 44.633,00) * 0 % =		44.633,00 €	
Honorar für oberen Wert (HOW) = HOWmin + (HOWmax - HOWmin) * HS	
  61.401,00 + (76.578,00 - 61.401,00) * 0 % =		61.401,00 €	
	
Grundhonorar (100%) (GH) = HUW + (HOW-HUW) * [(AK-UW) : (OW-UW)]	
  44.633,00 + (61.401,00 - 44.633,00) * [	
      (523.000,00 - 500.000,00) : (750.000,00 - 500.000,00)]	
		= 46.175,66 €	

Angebotsgrundlage:	
Leistungsphasen	HOAI (2021)	Angebot %	Angebot €	
1 Grundlagenermittlung	3%			
	a) Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner			
	b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten			
	c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
2 Vorplanung	10%			
	a) Analysieren der Grundlagen			
	b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der Belange der Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit			
	c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klärung und Angabe der für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen für zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und Gründungsart			
	d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit			
	e) Mitwirken bei der Kostenschätzung und bei der Terminplanung			
	f) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
3 Entwurfsplanung	15%			
	a) Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung			
	b) überschlägige statische Berechnung und Bemessung			
	c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks für zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel			
	d) überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau			
	e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erläuterungsbericht			
	f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit			
	g) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung			
	h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung			
	i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
4 Genehmigungsplanung	30%			
	a) Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk unter Berücksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen			
	b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzuständen			
	c) Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk oder Eintragen der statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Güte der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des Objektsplaners			
	d) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung			
	e) Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle			
	f) Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
5 Ausführungsplanung	40%			
	a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen			
	b) Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten Ausführungspläne des Objektplaners			
	c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen)			
	d) Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung			
	e) Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
6 Vorbereitung der Vergabe	2%			
	a) Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen in Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausführungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners			
	b) überschlägiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau			
	c) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu den Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis des Tragwerks			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			

Summe				

Grundleistungen:			
			
Honorarzone  gemäß § 52 HOAI: III
Honorarsatz: Basishonorarsatz (0%)			
Anrechenbare Kosten gemäß Kostenschätzung		523.000,00 €	
Grundhonorar für 100 %:		46.175,66 €	
    1 Grundlagenermittlung	 %	 €	
    2 Vorplanung	 %	 €	
    3 Entwurfsplanung	 %	 €	
    4 Genehmigungsplanung	 %	 €	
    5 Ausführungsplanung	 %	 €	
    6 Vorbereitung der Vergabe	 %	 €	
Summe der Grundleistungen:		 €	

Zeithonorar:			
	Stundenlohn Ingenieur	10,00 h	€	
	Stundenlohn Technischer Mitarbeiter	10,00 h	 €	
Summe		€	

Nebenkosten:			
	Erstellung Baugrundachten
Wiederaufbau der Brücke
Untersuchungen zur Tragfähigkeit der Bestandsbrücken	% von €	€	
	Statik	% von €	 €	
Summe der Nebenkosten:
		 €	
Summe Leistungsbild 
§ 51 HOAI: Tragwerksplanung (BA1 Brücken Und Toranlagen)			
 €	

				

Leistungsbild: § 34 HOAI: Gebäude (BA2 Schloss und Turm)
Bauliche Sicherung, Sanierung und funktionale Herrichtung des Schlossgebäudes und des Turms unter Berücksichtigung dder bauordnungsrechtlichen, statischen und denkmalrechtlichen Anforderungen

Kostenermittlung nach DIN276	
	
  Kostenermittlung nach DIN 276 Ausgabe Dezember 2008  für Kostenschätzung :	
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	100% von 990.000,00 €	990.000,00 €	
Summe	Bauwerk - Baukonstruktionen		990.000,00 €	

Summe	Kostenschätzung		990.000,00 €	

				

Interpolation:				

Anrechenbare Kosten gemäß Kostenschätzung vom 03.03.2026: 	
990.000,00 €	
Honorarzone (HZ): IV	
Honorarsatz  (HS): Basishonorarsatz (0%)	
	
Interpolation gemäß Honorartafel § 35:	
	
anrechenbare Kosten (AK)		990.000,00 €	
	
unterer Wert lt. Honorartafel (UW)		750.000,00 €	
  Von-Wert für unteren Wert (HUWmin)		112.156,00 €	
  Bis-Wert für unteren Wert (HUWmax)		126.301,00 €	
	
oberer Wert lt. Honorartafel (OW)		1.000.000,00 €	
  Von-Wert für oberen Wert (HOWmin)		144.268,00 €	
  Bis-Wert für oberen Wert (HOWmax)		162.464,00 €	
	
Honorar für unteren Wert (HUW) = HUWmin + (HUWmax - HUWmin) * HS	
  112.156,00 + (126.301,00 - 112.156,00) * 0 % =		112.156,00 €	
Honorar für oberen Wert (HOW) = HOWmin + (HOWmax - HOWmin) * HS	
  144.268,00 + (162.464,00 - 144.268,00) * 0 % =		144.268,00 €	
	
Grundhonorar (100%) (GH) = HUW + (HOW-HUW) * [(AK-UW) : (OW-UW)]	
  112.156,00 + (144.268,00 - 112.156,00) * [	
      (990.000,00 - 750.000,00) : (1.000.000,00 - 750.000,00)]	
		= 142.983,52 €	

Angebotsgrundlage:	
Leistungsphasen	HOAI (2021)	Angebot %	Angebot €	
1 Grundlagenermittlung	2%			
	a) Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers			
	b) Ortsbesichtigung			
	c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf			
	d) Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter			
	e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
2 Vorplanung	7%			
	a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten			
	b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte			
	c) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des Objekts			
	d) Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (z.B. städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, öffentlich-rechtliche)			
	e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen			
	f) Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit			
	g) Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen			
	h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs			
	i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
3 Entwurfsplanung	15%			
	a) Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (z.B. städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche) auf Grundlage der Vorplanung und als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, z.B. bei Gebäuden im Maßstab 1:100, z.B. bei Innenräumen im Maßstab 1:50 bis 1:20			
	b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen			
	c) Objektbeschreibung			
	d) Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit			
	e) Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschätzung			
	f) Fortschreiben des Terminplans			
	g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
4 Genehmigungsplanung	3%			
	a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter			
	b) Einreichen der Vorlagen			
	c) Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
5 Ausführungsplanung	25%			
	a) Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung, als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen			
	b) Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, z.B. bei Gebäuden im Maßstab 1:50 bis 1:1, z.B. bei Innenräumen im Maßstab 1:20 bis 1:1			
	c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Koordination und Integration von deren Leistungen			
	d) Fortschreiben des Terminplans			
	e) Fortschreiben der Ausführungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung während der Objektausführung			
	f) überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner geplanten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf übereinstimmung mit der Ausführungsplanung			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
6 Vorbereitung der Vergabe	10%			
	a) Aufstellen eines Vergabeterminplans			
	b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter			
	c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten			
	d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse			
	e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung			
	f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
7 Mitwirkung bei der Vergabe	4%			
	a) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner			
	b) Einholen von Angeboten			
	c) Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise			
	d) Führen von Bietergesprächen			
	e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens			
	f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche			
	g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung			
	h) Mitwirken bei der Auftragserteilung			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
8 Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation	32%			
	a) überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik			
	b) überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis			
	c) Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten			
	d) Aufstellen, Fortschreiben und überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm)			
	e) Dokumentation des Bauablaufs (z.B. Bautagebuch)			
	f) Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen			
	g) Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden Unternehmen			
	h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen			
	i) Kostenkontrolle durch überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen			
	j) Kostenfeststellung, z.B. nach DIN 276			
	k) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber			
	l) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran			
	m) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts			
	n) Übergabe des Objekts			
	o) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche			
	p) überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			

Summe				
			
Grundleistungen:			
			
Honorarzone  gemäß § 35 HOAI: IV
Honorarsatz: Basishonorarsatz (0%)			
Anrechenbare Kosten gemäß Kostenschätzung vom 03.03.2026		990.000,00 €	
Grundhonorar für 100 %:		142.983,52 €	
    1 Grundlagenermittlung	 %	 €	
    2 Vorplanung	 %	 €	
    3 Entwurfsplanung	 %	 €	
    4 Genehmigungsplanung	 %	 €	
    5 Ausführungsplanung	 %	 €	
    6 Vorbereitung der Vergabe	 %	 €	
    7 Mitwirkung bei der Vergabe	 %	 €	
    8 Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation	 %	 €	
Summe der Grundleistungen:		 €	

Zeithonorar:			
	Stundenlohn Ingenieur	10,00 h	 €	
	Stundenlohn Technischer Mitarbeiter	10,00 h	 €	
Summe		 €	

Umbauzuschlag:	
% von  €	
 €	

Nebenkosten:			
	Baubestellenüberwachung
2x Wöchentlich Baustellenüberwachung in Präsenz vor Ort		€	
	Sonstiges	% von €	 €	
Summe der Nebenkosten:
		 €	
Summe Leistungsbild 
§ 34 HOAI: Gebäude (BA2 Schloss und Turm)			
 €	

Leistungsbild: § 51 HOAI: Tragwerksplanung (BA2 Schloss und Turm)
Bauliche Sicherung, Sanierung und funktionale Herrichtung des Schlossgebäudes und des Turms unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen, statischen und denkmalrechtlichen Anforderungen

Nach § 50(1) HOAI2021 sind 55% der Baukonstruktionskosten und 10% der Kosten der Technischen Anlagen anrechenbar

Kostenermittlung nach DIN276	
	
  Kostenermittlung nach DIN 276 Ausgabe Dezember 2008  für Kostenschätzung :	
300	Bauwerk – Baukonstruktionen	100% von 577.500,00 €	577.500,00 €	
Summe	Bauwerk – Baukonstruktionen		577.500,00 €	

Summe	Kostenschätzung		577.500,00 €	

				

Interpolation:				

Anrechenbare Kosten gemäß Kostenschätzung: 	
577.500,00 €	
Honorarzone (HZ): III	
Honorarsatz  (HS): Basishonorarsatz (0%)	
	
Interpolation gemäß Honorartafel § 52:	
	
anrechenbare Kosten (AK)		577.500,00 €	
	
unterer Wert lt. Honorartafel (UW)		500.000,00 €	
  Von-Wert für unteren Wert (HUWmin)		44.633,00 €	
  Bis-Wert für unteren Wert (HUWmax)		55.666,00 €	
	
oberer Wert lt. Honorartafel (OW)		750.000,00 €	
  Von-Wert für oberen Wert (HOWmin)		61.401,00 €	
  Bis-Wert für oberen Wert (HOWmax)		76.578,00 €	
	
Honorar für unteren Wert (HUW) = HUWmin + (HUWmax - HUWmin) * HS	
  44.633,00 + (55.666,00 - 44.633,00) * 0 % =		44.633,00 €	
Honorar für oberen Wert (HOW) = HOWmin + (HOWmax - HOWmin) * HS	
  61.401,00 + (76.578,00 - 61.401,00) * 0 % =		61.401,00 €	
	
Grundhonorar (100%) (GH) = HUW + (HOW-HUW) * [(AK-UW) : (OW-UW)]	
  44.633,00 + (61.401,00 - 44.633,00) * [	
      (577.500,00 - 500.000,00) : (750.000,00 - 500.000,00)]	
		= 49.831,08 €	

Angebotsgrundlage:	
Leistungsphasen	HOAI (2021)	Angebot %	Angebot €	
1 Grundlagenermittlung	3%			
	a) Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner			
	b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten			
	c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
2 Vorplanung	10%			
	a) Analysieren der Grundlagen			
	b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der Belange der Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit			
	c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klärung und Angabe der für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen für zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und Gründungsart			
	d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit			
	e) Mitwirken bei der Kostenschätzung und bei der Terminplanung			
	f) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
3 Entwurfsplanung	15%			
	a) Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung			
	b) überschlägige statische Berechnung und Bemessung			
	c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks für zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel			
	d) überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau			
	e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erläuterungsbericht			
	f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit			
	g) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung			
	h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung			
	i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
4 Genehmigungsplanung	30%			
	a) Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk unter Berücksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen			
	b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzuständen			
	c) Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk oder Eintragen der statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Güte der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des Objektsplaners			
	d) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung			
	e) Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle			
	f) Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
5 Ausführungsplanung	40%			
	a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen			
	b) Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten Ausführungspläne des Objektplaners			
	c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen)			
	d) Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung			
	e) Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
6 Vorbereitung der Vergabe	2%			
	a) Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen in Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausführungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners			
	b) überschlägiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau			
	c) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu den Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis des Tragwerks			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			

Summe				

Grundleistungen:			
			
Honorarzone  gemäß § 52 HOAI: III
Honorarsatz: Basishonorarsatz (0%)			
Anrechenbare Kosten gemäß Kostenschätzung		577.500,00 €	
Grundhonorar für 100 %:		49.831,08 €	
    1 Grundlagenermittlung	 %	 €	
    2 Vorplanung	 %	 €	
    3 Entwurfsplanung	 %	 €	
    4 Genehmigungsplanung	 %	 €	
    5 Ausführungsplanung	 %	 €	
    6 Vorbereitung der Vergabe	 %	 €	
Summe der Grundleistungen:		 €	

Zeithonorar:			
	Stundenlohn Ingenieur	10,00 h	 €	
	Stundenlohn Technischer Mitarbeiter	10,00 h	 €	
Summe		 €	

Nebenkosten:			
	Erstellung Baugrundachten	% von €	 €	
	Statik	% von €	€	
Summe der Nebenkosten:
		€	
Summe Leistungsbild 
§ 51 HOAI: Tragwerksplanung (BA2 Schloss und Turm)			
€	

Leistungsbild: § 34 HOAI: Gebäude (BA3 Touristeninformationsstelle)
Errichtung bzw. Ausbau einer Touristeninformationsstelle einschließlich der erforderlichen baulichen, technischen und infrastrukturellen Maßnahmen zur nachhaltigen touristischen Nutzung

Kostenermittlung nach DIN276	
	
  Kostenermittlung nach DIN 276 Ausgabe Dezember 2008  für Kostenschätzung :	
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	100% von 678.000,00 €	678.000,00 €	
Summe	Bauwerk - Baukonstruktionen		678.000,00 €	

Summe	Kostenschätzung		678.000,00 €	

				

Interpolation:				

Anrechenbare Kosten gemäß Kostenschätzung: 	
678.000,00 €	
Honorarzone (HZ): III	
Honorarsatz  (HS): Basishonorarsatz (0%)	
	
Interpolation gemäß Honorartafel § 35:	
	
anrechenbare Kosten (AK)		678.000,00 €	
	
unterer Wert lt. Honorartafel (UW)		500.000,00 €	
  Von-Wert für unteren Wert (HUWmin)		62.900,00 €	
  Bis-Wert für unteren Wert (HUWmax)		78.449,00 €	
	
oberer Wert lt. Honorartafel (OW)		750.000,00 €	
  Von-Wert für oberen Wert (HOWmin)		89.927,00 €	
  Bis-Wert für oberen Wert (HOWmax)		112.156,00 €	
	
Honorar für unteren Wert (HUW) = HUWmin + (HUWmax - HUWmin) * HS	
  62.900,00 + (78.449,00 - 62.900,00) * 0 % =		62.900,00 €	
Honorar für oberen Wert (HOW) = HOWmin + (HOWmax - HOWmin) * HS	
  89.927,00 + (112.156,00 - 89.927,00) * 0 % =		89.927,00 €	
	
Grundhonorar (100%) (GH) = HUW + (HOW-HUW) * [(AK-UW) : (OW-UW)]	
  62.900,00 + (89.927,00 - 62.900,00) * [	
      (678.000,00 - 500.000,00) : (750.000,00 - 500.000,00)]	
		= 82.143,22 €	

Angebotsgrundlage:	
Leistungsphasen	HOAI (2021)	Angebot %	Angebot €	
1 Grundlagenermittlung	2%			
	a) Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers			
	b) Ortsbesichtigung			
	c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf			
	d) Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter			
	e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
2 Vorplanung	7%			
	a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten			
	b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte			
	c) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des Objekts			
	d) Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (z.B. städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, öffentlich-rechtliche)			
	e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen			
	f) Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit			
	g) Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen			
	h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs			
	i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
3 Entwurfsplanung	15%			
	a) Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (z.B. städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche) auf Grundlage der Vorplanung und als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, z.B. bei Gebäuden im Maßstab 1:100, z.B. bei Innenräumen im Maßstab 1:50 bis 1:20			
	b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen			
	c) Objektbeschreibung			
	d) Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit			
	e) Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschätzung			
	f) Fortschreiben des Terminplans			
	g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
4 Genehmigungsplanung	3%			
	a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter			
	b) Einreichen der Vorlagen			
	c) Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
5 Ausführungsplanung	25%			
	a) Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung, als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen			
	b) Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, z.B. bei Gebäuden im Maßstab 1:50 bis 1:1, z.B. bei Innenräumen im Maßstab 1:20 bis 1:1			
	c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Koordination und Integration von deren Leistungen			
	d) Fortschreiben des Terminplans			
	e) Fortschreiben der Ausführungsplanung aufgrund der Gewerke orientierten Bearbeitung während der Objektausführung			
	f) überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner geplanten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf übereinstimmung mit der Ausführungsplanung			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
6 Vorbereitung der Vergabe	10%			
	a) Aufstellen eines Vergabeterminplans			
	b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter			
	c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten			
	d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse			
	e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung			
	f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
7 Mitwirkung bei der Vergabe	4%			
	a) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner			
	b) Einholen von Angeboten			
	c) Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise			
	d) Führen von Bietergesprächen			
	e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens			
	f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche			
	g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung			
	h) Mitwirken bei der Auftragserteilung			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
8 Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation	32%			
	a) überwachen der Ausführung des Objektes auf übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik			
	b) überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis			
	c) Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten			
	d) Aufstellen, Fortschreiben und überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm)			
	e) Dokumentation des Bauablaufs (z.B. Bautagebuch)			
	f) Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen			
	g) Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden Unternehmen			
	h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen			
	i) Kostenkontrolle durch überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen			
	j) Kostenfeststellung, z.B. nach DIN 276			
	k) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber			
	l) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran			
	m) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts			
	n) übergabe des Objekts			
	o) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche			
	p) überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			

Summe				
			
Grundleistungen:			
			
Honorarzone  gemäß § 35 HOAI: III
Honorarsatz: Basishonorarsatz (0%)			
Anrechenbare Kosten gemäß Kostenschätzung		678.000,00 €	
Grundhonorar für 100 %:		82.143,22 €	
    1 Grundlagenermittlung	 %	 €	
    2 Vorplanung	 %	 €	
    3 Entwurfsplanung	 %	 €	
    4 Genehmigungsplanung	 %	 €	
    5 Ausführungsplanung	 %	 €	
    6 Vorbereitung der Vergabe	 %	 €	
    7 Mitwirkung bei der Vergabe	 %	 €	
    8 Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation	 %	 €	
Summe der Grundleistungen:		 €	

Zeithonorar:			
	Stundenlohn Ingenieur	10,00 h	 €	
	Stundenlohn Technischer Mitarbeiter	10,00 h	 €	
Summe		 €	

Umbauzuschlag:	
% von €	
 €	

Nebenkosten:			
	Baustellenüberwachung
2x Wöchentlich Baustellenüberwachung in Präsenz vor Ort		 €	
	Sonstiges	% von €	 €	
Summe der Nebenkosten:
		 €	
Summe Leistungsbild 
§ 34 HOAI: Gebäude (BA3 Touristeninformationsstelle)			
 €	

Leistungsbild: § 51 HOAI: Tragwerksplanung (BA3 Touristeninformationsstelle)
Errichtung bzw. Ausbau einer Touristeninformationsstelle einschließlich der erforderlichen baulichen, technischen und infrastrukturellen Maßnahmen zur nachhaltigen touristischen Nutzung

Nach § 50(1) HOAI2021 sind 55% der Baukonstruktionskosten und 10% der Kosten der Technischen Anlagen anrechenbar

Kostenermittlung nach DIN276	
	
  Kostenermittlung nach DIN 276 Ausgabe Dezember 2008  für Kostenschätzung :	
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	100% von 372.900,00 €	372.900,00 €	
Summe	Bauwerk - Baukonstruktionen		372.900,00 €	

Summe	Kostenschätzung		372.900,00 €	

				

Interpolation:				

Anrechenbare Kosten gemäß Kostenschätzung: 	
372.900,00 €	
Honorarzone (HZ): III	
Honorarsatz  (HS): Basishonorarsatz (0%)	
	
Interpolation gemäß Honorartafel § 52:	
	
anrechenbare Kosten (AK)		372.900,00 €	
	
unterer Wert lt. Honorartafel (UW)		350.000,00 €	
  Von-Wert für unteren Wert (HUWmin)		33.776,00 €	
  Bis-Wert für unteren Wert (HUWmax)		42.125,00 €	
	
oberer Wert lt. Honorartafel (OW)		500.000,00 €	
  Von-Wert für oberen Wert (HOWmin)		44.633,00 €	
  Bis-Wert für oberen Wert (HOWmax)		55.666,00 €	
	
Honorar für unteren Wert (HUW) = HUWmin + (HUWmax - HUWmin) * HS	
  33.776,00 + (42.125,00 - 33.776,00) * 0 % =		33.776,00 €	
Honorar für oberen Wert (HOW) = HOWmin + (HOWmax - HOWmin) * HS	
  44.633,00 + (55.666,00 - 44.633,00) * 0 % =		44.633,00 €	
	
Grundhonorar (100%) (GH) = HUW + (HOW-HUW) * [(AK-UW) : (OW-UW)]	
  33.776,00 + (44.633,00 - 33.776,00) * [	
      (372.900,00 - 350.000,00) : (500.000,00 - 350.000,00)]	
		= 35.433,50 €	

Angebotsgrundlage:	
Leistungsphasen	HOAI (2021)	Angebot %	Angebot €	
1 Grundlagenermittlung	3%			
	a) Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner			
	b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten			
	c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
2 Vorplanung	10%			
	a) Analysieren der Grundlagen			
	b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der Belange der Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit			
	c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klärung und Angabe der für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen für zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und Gründungsart			
	d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit			
	e) Mitwirken bei der Kostenschätzung und bei der Terminplanung			
	f) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
3 Entwurfsplanung	15%			
	a) Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung			
	b) überschlägige statische Berechnung und Bemessung			
	c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks für zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel			
	d) überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau			
	e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erläuterungsbericht			
	f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit			
	g) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung			
	h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung			
	i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
4 Genehmigungsplanung	30%			
	a) Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk unter Berücksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen			
	b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzuständen			
	c) Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk oder Eintragen der statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Güte der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des Objektsplaners			
	d) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung			
	e) Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle			
	f) Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
5 Ausführungsplanung	40%			
	a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen			
	b) Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten Ausführungspläne des Objektplaners			
	c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen)			
	d) Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung			
	e) Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
6 Vorbereitung der Vergabe	2%			
	a) Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen in Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausführungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners			
	b) überschlägiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau			
	c) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu den Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis des Tragwerks			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			

Summe				

Grundleistungen:			
			
Honorarzone gemäß § 52 HOAI: III
Honorarsatz: Basishonorarsatz (0%)			
Anrechenbare Kosten gemäß Kostenschätzung		372.900,00 €	
Grundhonorar für 100 %:		35.433,50 €	
    1 Grundlagenermittlung	 %	 €	
    2 Vorplanung	 %	 €	
    3 Entwurfsplanung	 %	 €	
    4 Genehmigungsplanung	 %	 €	
    5 Ausführungsplanung	 %	 €	
    6 Vorbereitung der Vergabe	 %	 €	
Summe der Grundleistungen:		 €	

Zeithonorar:			
	Stundenlohn Ingenieur	10,00 h	 €	
	Stundenlohn Technischer Mitarbeiter	10,00 h	 €	
Summe		 €	

Nebenkosten:			
	Erstellung Baugrundachten	% von €	 €	
	Statik	% von €	 €	
	Brandschutzgutachten	% von €	 €	
Summe der Nebenkosten:
		 €	
Summe Leistungsbild 
§ 51 HOAI: Tragwerksplanung (BA3 Touristeninformationsstelle)			
 €	

Leistungsbild: § 55 HOAI: Technische Ausrüstung (BA2 und BA3)
Haustechnik Elektro
BA2 - 60.000€
BA3 - 60.000€

Haustechnik (HLS)
BA3 - 60.000€

Kostenermittlung nach DIN276	
	
  Kostenermittlung nach DIN 276 Ausgabe Dezember 2008  für Kostenschätzung :	
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	100% von 30.000,00 €	30.000,00 €	
420	Wärmeversorgungsanlagen	100% von 30.000,00 €	30.000,00 €	
440	Starkstromanlagen	100% von 60.000,00 €	60.000,00 €	
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	100% von 60.000,00 €	60.000,00 €	
Summe	Bauwerk - Technische Anlagen		180.000,00 €	

Summe	Kostenschätzung		180.000,00 €	

				

Interpolation:				

Anrechenbare Kosten gemäß Kostenschätzung Leistungsphase 1-8 	
180.000,00 €	
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Zone II,0%)	30.000,00 €	
420	Wärmeversorgungsanlagen (Zone II,0%)	30.000,00 €	
440	Starkstromanlagen (Zone II,0%)	60.000,00 €	
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen (Zone II,0%)	60.000,00 €	
			
Interpolation gemäß Honorartafel § 56:			
			
Honorarzone (HZ): II			
Honorarsatz  (HS): Basishonorarsatz (0%)			
Anrechenbare Kosten (AK)		180.000,00 €	
			
unterer Kostenwert lt. Honorartafel (UW)		150.000,00 €	
  Von-Wert für unteren Wert (HUWmin)		37.311,00 €	
  Bis-Wert für unteren Wert (HUWmax)		43.800,00 €	
oberer Kostenwert lt. Honorartafel (OW)		250.000,00 €	
  Von-Wert für oberen Wert (HOWmin)		55.726,00 €	
  Bis-Wert für oberen Wert (HOWmax)		65.418,00 €	
Honorar für unteren Wert (HUW) = HUWmin + (HUWmax - HUWmin) * HS			
  37.311,00 + (43.800,00 - 37.311,00) * 0 % =		37.311,00 €	
Honorar für oberen Wert (HOW) = HOWmin + (HOWmax - HOWmin) * HS			
  55.726,00 + (65.418,00 - 55.726,00) * 0 % =		55.726,00 €	
Grundhonorar (100%) (GH) = HUW + (HOW-HUW) * [(AK-UW) : (OW-UW)]			
  37.311,00 + (55.726,00 - 37.311,00) * [			
      (180.000,00 - 150.000,00) : (250.000,00 - 150.000,00)] =		42.835,50 €	

Angebotsgrundlage:	
Leistungsphasen	HOAI (2021)	Angebot %	Angebot €	
1 Grundlagenermittlung	2%			
	a) Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner			
	b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und ggf. zur technischen Erschließung			
	c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
2 Vorplanung	9%			
	a) Analysieren der Grundlagen, Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten			
	b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehören z.B.: Vordimensionieren der Systeme und maßbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Lösungsmöglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschließlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Berücksichtigung exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf			
	c) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbild für jede Anlage			
	d) Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Prozesse, Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen			
	e) Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähigkeit und mit den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur			
	f) Kostenschätzung nach DIN 276 (2.Ebene) und bei der Terminplanung			
	g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
3 Entwurfsplanung	17%			
	a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lösung) unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollständigen Entwurf			
	b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile			
	c) Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschätzen von jährlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und Primärenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs für technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objekt-planer abgestimmten Ausgabemaßstab mit Angabe maßbestimmender Dimensionen Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben z.B. für Energiebilanzierungen Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen			
	d) übergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der für die Tragwerksplanung notwendigen Angaben über Durchführungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchführungsplänen)			
	e) Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden Stellen über die Genehmigungsfähigkeit			
	f) Kostenberechnung nach DIN 276 (3.Ebene) und bei der Terminplanung			
	g) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung			
	h) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
4 Genehmigungsplanung	2%			
	a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen, einschließlich der Anträge auf Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden			
	b) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
5 Ausführungsplanung	22%			
	a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lösung) unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausführungsreifen Lösung			
	b) Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen und Anlagenteile Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab und Detaillierungsgrad einschließlich Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattpläne) Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen bzw. der GA Funktionslisten, Abstimmen der Ausführungszeichnungen mit dem Objektplaner und den übrigen Fachplanern			
	c) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen			
	d) Fortschreibung des Terminplans			
	e) Fortschreiben der Ausführungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausführungsplanung des Objektplaners, übergeben der fortgeschriebenen Ausführungsplanung an die ausführenden Unternehmen			
	f) Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpläne der ausführenden Unternehmen auf übereinstimmung mit der Ausführungsplanung			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
6 Vorbereitung der Vergabe	7%			
	a) Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter			
	b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, einschließlich der Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender Regelwerke			
	c) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten			
	d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse			
	e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung			
	f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
7 Mitwirkung bei der Vergabe	5%			
	a) Einholen von Angeboten			
	b) Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel nach Einzelpositionen, Prüfen und Werten der Angebote für zusätzliche oder geänderte Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise			
	c) Führen von Bietergesprächen			
	d) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung			
	e) Erstellen der Vergabevorschläge, Mitwirken bei der Dokumentation der Vergabeverfahren			
	f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftragserteilung			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			
8 Objektüberwachung – Bauüberwachung	35%			
	a) überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit den ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplänen, den einschlägigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik			
	b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten			
	c) Aufstellen, Fortschreiben und überwachen des Terminplans (Balkendiagramm)			
	d) Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch)			
	e) Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter oder zusätzlicher Leistungen der Unternehmer und der Angemessenheit der Preise			
	f) Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen			
	g) Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prüfen und Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise			
	h) Kostenkontrolle durch überprüfen der Leistungsabrechnungen der ausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag.			
	i) Kostenfeststellung			
	j) Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprüfungen			
	k) fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mängeln und Erteilen einer Abnahmeempfehlung			
	l) Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran			
	m) Prüfung der übergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzähligkeit, Vollständigkeit und stichprobenartige Prüfung auf Übereinstimmung mit dem Stand der Ausführung			
	n) Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung			
	o) überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel			
	p) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts			
	 Siemon-Bewertungstabellen im Auftrag des Bundesbauministeriums und Bestandteil der RBBau-Verträge des Bundes und der Länder			

Summe				

Grundleistungen:			
			
Honorarzone  gemäß § 56 HOAI: II
Honorarsatz: Basishonorarsatz (0%)			
Anrechenbare Kosten gemäß Kostenschätzung		180.000,00 €	
Grundhonorar für 100 %:		42.835,50 €	
    1 Grundlagenermittlung	 %	 €	
    2 Vorplanung	 %	 €	
    3 Entwurfsplanung	 %	 €	
    4 Genehmigungsplanung	 %	 €	
    5 Ausführungsplanung	 %	 €	
    6 Vorbereitung der Vergabe	 %	 €	
    7 Mitwirkung bei der Vergabe	 %	 €	
    8 Objektüberwachung - Bauüberwachung	 %	 €	
Summe der Grundleistungen:		 €	

Zeithonorar:			
	Stundenlohn Ingenieur	10,00 h	 €	
	Stundenlohn Technischer Mitarbeiter	10,00 h	 €	
Summe		 €	

Nebenkosten:			
	Baustellenüberwachung
2x Wöchentlich Baustellenüberwachung in Präsenz vor Ort		 €	
	Sonstiges	% von €	 €	
Summe der Nebenkosten:
		 €	
Summe Leistungsbild 
§ 55 HOAI: Technische Ausrüstung (BA2 und BA3)			
 €	
				
Nettohonorar:			€	
	
Nettobetrag	
USt.	
Bruttobetrag	
Zwischensumme (19 % USt.)	 €	 €	 €	
Nachlass für Gesamtbeauftragung			-€	
Zuschlag für besondere Aufwendungen 			€	

Angebotsbetrag (19 % USt.)
	
 €	
 €	
€	

Fragen und Anmerkungen Mögliche Fragen und Bemerkungen zu den jeweiligen Bauabschnitten bitte unten notieren!
BA1

BA2

BA3